Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Niwiskach Niwiska dz. nr 42/33

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY  DLA ETAPU I 
– CZĘŚĆ I – TERMIN REALIZACJI DO 31.08.2015 r.

	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
1.	SALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM – ROBOTY BUDOWLANE
	 
	1.1	Roboty ziemne

	1.2	Fundamenty i ściany podziemia

	1.3	Konstrukcja ścian i stropów

	1.4	Ścianki działowe

	1.5	Komin dymowe,spalinowe,wentylacyjne -  systemowy ceramiczny

	1.6	Konstrukcja dachu

	1.7	Pokrycia dachowe

	1.8	Konstrukcja schodów

	1.9	Elementy ślusarsko-kowalskie

	1.10	Stolarka drzwiowa

	1.11	Stolarka okienna

 – CZĘŚĆ II – TERMIN REALIZACJI DO 15.10.2015 r.

	1.12	Tynki i okładziny wewnętrzne -  ( 50%)

	1.13	Izolacje specjalne

	1.13.1	w tym : Izolacje - dach sali

	1.13.2	w tym : Izolacje - dach zaplecza

	1.14	Podłoża, posadzki, podłogi – ( 50%)

	

HARMONOGRAM ROBÓT DLA ETAPU II – TERMIN REALIZACJI DO 22.12.2015 r.

	
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

               2.TECHNOLOGIA KOTŁOWNII

	  2.1. Technologia kotłowni	  

		
                3.INSTALACJE SANITARNE
	 
	3.2	Instalacje wodno-kanalizacyjne

		w tym : Instalacje kanalizacyjne

		w tym : Instalacje wodociągowe

		w tym : Instalacje C.O.

	3.3	Instalacje wentylacyjne  i klimatyczne

		w tym : Zasilanie nagrzewnic wodnych

		w tym : Wentylacja mechaniczna zaplecza- nawiew

		w tym : Wentylacja mechaniczna zaplecza- wywiew

		w tym : Wentylacja mechaniczna zaplecza - centrala wentylacyjna

		w tym : Wentylacja mechaniczna zaplecza sali gimnastycznej- nawiew/wywiew

		w tym : Instalacje wentylacyjne - wentylatory kanałowe

		w tym : Instalacje klimatyzacyjne.

		w tym : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.

		w tym : Izolacje instalacji wentylacji
		
	              4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	 
	4.1	Rozdzielnia główna  i jej zasilanie

	 
	 
	4.2	Instalacje elektryczne oświetleniowe

	4.3	Instalacje elektryczne gniazdkowe

		w tym : Instalacje elektryczne - instalacja połączeń wyrównawczych

	4.4	Badanie instalacji elektrycznych.

	4.5	Sieć telekomunikacyjna

	4.6	Monitoring

	4.7	System włamania

	4.8	Instalacja odgromowa

HARMONOGRAM ROBÓT DLA ETAPU III – TERMIN REALIZACJI DO 30.05.2016 r.

4.	SALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM – ROBOTY BUDOWLANE

                   4.1. Tynki i okładziny wewnętrzne -  ( 50%)

	
	 
	                   4.2.Podłoża, posadzki, podłogi – ( 50%)

                  4.3. Malowanie i okładziny ścian

		w tym : Malowanie                                                                                                                                   
	 
		w tym : Okładziny ścian korytarzy, przegrody WC

	4.4.	Elewacja

	4.5.	Opaski chodnikowe                                                                                                                

 	
5.	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
	 
	5.1	w tym : Różne pozostałe

	5.2	Przyłącze kanalizacyjne sanitarne

		w tym : Elementy zabezpieczające wykopy.

		w tym : Przyłącze kanalizacyjne

		w tym : Roboty towarzyszące                                                                                                                           

6.	ROZBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ
	 
	6.1	Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjnobudowlane z robotami wykończeniowymi

		
	HARMONOGRAM ROBÓT DLA ETAPU IV – TERMIN REALIZACJI DO 29.07.2016 r.

7.	BUDOWA NAWIERZCHNI PLACÓW I CHODNIKÓW,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	 
	7.1	w tym : Roboty ziemne

	7.2	w tym : Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwy odsączające - parking, ciagi jezdne i chodniki.

	7.3	w tym : Nawierzchnie - parking i ciągi jezdne.

	7.4	w tym : Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwy odsączające - chodniki i ciągi piesze

	7.5	w tym : Zagospodarowanie terenów zielonych

	7.6	w tym : Utrzymanie terenów zielonych

	7.7	w tym : Elementy placu zabaw

	7.8	w tym : Instalacje elektryczne - montaż słupów oświetleniowych.

8.	WYPOSAŻENIE STAŁE – SALA SPORTOWA	
	 
                   8.Wyposażenie stałe Sali sportowej	  

                   9.  WYPOSAŻENIE RUCHOME  – ZAPLECZE
                   9.1 Wyposażenie - pomieszczenie 110 i 113

	
	 
	                  9.2   Wyposażenie - pomieszczenie 104

	
	 
	                  9.3.  Wyposażenie - pomieszczenie nr 106

		
	 
	                  9.4.  Wyposażenie - pomieszczenie 114

		
	 
	                   9.5.  Wyposażenie - pomieszczenie 102

	 
	 
	                  9.6.  Wyposażenie - pomieszczenie 101

	
	 
	                  9.7.  Wyposażenie - toalety pom. nr 112,111,109,108,107,103

	                                       9,8. Wyposażenie administracyjne